화순군 고시 제 2022 - 044호

내평 마을만들기사업 시행계획 승인 고시

화순읍 내평 마을만들기사업에 대한 시행계획 승인사항을 「농어촌정비법」 제82조 제3항 의거 다음과 같이 고시합니다.

(인)

2022.  03.  22.

화  순  군  수

1. 사 업 명 : 내평 마을만들기사업

2. 사업목적

◦ 농촌 지역의 특성에 맞는 마을단위 기초생활기반 확충, 경관․환경 개선 등  주민의 정주 여건 개선 및 삶의 질 향상을 도모

◦ 지역주민의 최소한의 삶의 질을 향상하고 마을단위 공동체 활성화 기여

3. 사업위치 : 전라남도 화순군 화순읍 내평리 내평마을

4. 사업기간 : 2021년~2022년(2년간)

5. 사업비 : 400백만원(지방비 100%)

6. 사업효과

◦ 정주여건 및 생활환경 개선으로 주민 삶의 질 향상

◦ 마을이 품고 있는 유ㆍ무형의 전통자원을 활용한 사업 추진으로 주민 참여율을 높이며 자긍심 고취

7. 시행자 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23  화순군수

8. 문의처 : 화순군청 건설과 농촌개발팀(061-379-3773)

■ 세부 사업계획

구분	사업명	사업량	단위	사업비(백만원)
				계	2021년	2022년
총사업비				400	33	367
소계				319	0	319
기초 생활 기반 확충	길쌈마루전시관 증축공사 (건축)	1	식	194	-	194
	길쌈마루전시관 증축공사 (전기)	1	식	41	-	41
	길쌈마루전시관 증축공사 (통신)	1	식	18	-	18
	길쌈마루전시관 증축공사 (소방)	1	식	13	-	13
	마을회관보수	1	식	29	-	29
	CCTV 설치(4대)	1	식	24	-	24
소계				81	33	48
제경비	기본계획수립용역	1	식	18	18	-
	실시설계용역	1	식	19	15	4
	예비비	1	식	44	-	44