道路現況 및 整備計劃

平   昌   郡

道路等級別 全體現況

도로등급	노선수	포장현황(㎞)			포장율 (%)	관 리 청	비고
		계	포장	미포장
고 속 도 로	1	44.5	44.5	-	100	한국도로공사
국 도	4	164.9	164.9	-	100	국토해양부 (원주지방국토관리청)
국가지원 지 방 도	1	8.2	8.2	-	100	강 원 도
지방도	7	139.9	84.0	55.9	60	강 원 도
군 도	15	182.0	104.5	77.5	57	평 창 군
농어촌 도 로	90	400	219.1	180.9	55	평 창 군
농촌마을길 및 농로	1,155	806.7	492.2	314.5	61	평 창 군	비법정 도 로

□ 高速道路

노선명	노선번호	시점	종점	연장(㎞)			포장율 (%)
				계	포장	미포장
계	1개 노선			44.5	44.5	-	100
영동선	50	봉 평 진 조	대관령 횡 계	44.5	44.5	-	100

□ 國  道

노선명	노선번호	시점	종점	연장(㎞)			포장율 (%)
				계	포장	미포장
계	4개 노선			164.9	164.9	-	100
인천~강릉	6	봉평 무이	대관령 진고개	56.3	56.3	-	100
부산~신고산	31	평창 도돈	용평 운두령	54.0	54.0	-	100
인천~동해	42	방림 문재	미탄 백운	34.7	34.7	-	100
광양~양양	59	진부 장전	진부 간평	19.9	19.9	-	100

國道 路線別 推進計劃

노선 번호	구 간	연장 (㎞)	소요사업비	사업 기간	추진현황
31호	방림~유동 (1공구)	11.2	총 1,365억원 - 기투자: 8억원 -‘08년: 5억원 -‘09년: 15억원 - 향 후:1,337억원	‘2006. ~ 2015.	․ 실시설계 완료(‘05년) ․ 보상협의중 ․‘09년도 착공계획
	유동~연덕 (2공구)	11.1	총 918억원 - 기투자: 126억원 -‘08년: 47억원 -‘09년: 50억원 - 향 후: 695억원	‘2006. ~ 2015.	․ 실시설계 완료(‘06년) ․ 교량하부 가설(0.39km) - 원동교,연덕교 ․ 시공사: 임광토건(주) ․ 감리사:유신코퍼레이션
42호	노론리~창리 (1공구)	4.2	총 745억원 - 기투자: 50억원 -‘08년: 50억원 -‘09년: 18억원 - 향 후: 627억원	‘2006. ~ 2015.	․ 실시설계 완료 ․ 기획예산처 타당성검토 결과 규모축소 결정 (8.72km -> 4.14km) ․ '07.12.18착공,토공 및 지장물이설 협의중
	창리~군계 (2공구)	10.8	총 807억원 - 기투자: 143억원 -‘08년: 109억원 -‘09년: 120억원 - 향 후: 435억원	‘2006. ~ 2015.	․ 실시설계완료(‘04년) ․ 교량14개소 교대 및 하부 가설, 토공, 보상90%완료 ․ 시공사: 한라건설 ․ 감리사: 신성ENG
59호	진부~마평	7.5	총 645억원 - 기투자: 185억원 -‘08년: 92억원 -‘09년: 240억원 - 향 후: 128억원	‘2006. ~ 2011.	․ 착 공: ‘06.6.8 ․ 하진부~마평간 터널완료 ․ 시공사: 동원건설 ․ 진도: 76%
	마평~나전	25.4	총 3,100억원 - 기투자: 30억원 -‘08년: 5억원 - 향 후:3,065억원	‘2008. ~ 2016.	․‘07년 실시설계완료

□ 國家支援地方道

노선명	노선번호	시점	종점	연장(㎞)			포장율 (%)
				계	포장	미포장
계	1개 노선			8.2	8.2	-	100
화성~평창	82	주 천	도돈	8.2	8.2	-	100

□ 地 方 道

노선명	노선번호	시점	종점	연장(㎞)			포장율 (%)
				계	포장	미포장
계	7개 노선			140.0	84.0	56.0	60
상걸~봉평	408	봉평 무이	용평 백옥포	21.8	10.4	11.4	48
하진부~고단	410	진부 신기	진부 봉산	16.5	2.0	14.5	12
문곡~창리	415	미탄 율치	미탄 창리	5.4	5.4	-	100
동면~방림	420	방림 계촌	방림 방림	17.4	17.4	-	100
내면~덕산	424	봉평 보래령	대화 벽파령	41.9	26.6	15.3	64
신남~진부	446	진부 북대	진부 간평	19.9	5.1	14.8	26
진부~강릉	456	진부 간평	도암 대관령	17.1	17.1	-	100

地方道 路線別 推進計劃

노선 번호	구 간	사업량	소요사업비	사업 기간	추진현황
408호	면온IC ~ 무이	4차로 선형개량 L=6.9㎞	총 680억원	‘2008. ~ 2012.	․ 기본계획 완료(‘06년) ․ 실시설계중 노선 미확정 으 로 과업중지중 ․ 면온지역 주민 노선반대 => 2차선 선형개량 요구
415호	미탄 율치~ 영월 북면 문곡리	15.5㎞ (B=8.5m)	총 655억원 (기본계획용역시) -‘09년: 10억원 (실시설계비)	‘2010. ~	․‘07.9.18 기본계획설명회 ․ 실시설계용역중 - 용역사:일신하이텍, (주)유신코퍼레이션 -‘08.7.14 ~‘10.1.5 ․ ‘2010년 발주예정
424호	보래령	2차로8.4㎞ 터널1/2.0㎞ 교량14/335m	총 640억원 - 기투자:332억원 -‘08년: 111억원 -‘09년: 110억원 - 향 후: 87억원	‘2002.~ 2009.	․ 도로확포장2.9㎞완료 ․ 교량14/335m완료 ․ 터널1/2.0㎞완료 ․ 배수공 L=300m완료 ․ 시공사:두성산업개발 ․ 진 도:65%
	창동~덕거	2차로5.4㎞ 교량2개소/140m	총170억 -‘09년: 2억원 (실시설계비)	‘2009. ~ 2013.	․ 기본계획 완료(06년) ․ 실시설계용역중 -‘08.6.23~09.6.18 ․ ‘09년 발주예정
	금당~상안미	2차로8.1㎞ 교량4/390m	총445억 - 기투자: 23억원 -‘08년: 44억원 -‘09년: 67억원 - 향 후: 311억원	‘2006. ~ 2011.	․ 착공:‘06년도 ․ 개수1교 교대(A1,A2) ․ 강교제작 및 가설 ․ 종합진도 4.8%
456호	간평 ~ 횡계	L=9.5km (2~4차로, 교량3개소/84m)	총 494억원 -‘09년: 12억원 - 향 후: 482억원	‘2008.~ 2012.	․ 기본계획 및 실시설계완료 (설계:홍익기술단, 삼경) ․ 총액입찰완료

郡 道 現 況

노선명	노선 번호	시점	종점	연 장 (㎞)			포장율 (%)
				계	포장	미포장
계	15개 노선			182.0	104.5	77.5	57
종부~ 하안미	1	평창 종부	대화 하안미	18.5	8.7	9.8	47
운교~ 방림	2	방림 운교	방림 계촌	3.1	3.1	-	100
주진~ 방림	3	평창 주진	방림 방림	15.0	4.0	11.0	27
계촌~ 대화	4	방림 계촌	대화 대화	27.4	3.3	24.1	12
한탄~ 마하	5	미탄 한탄	미탄 마하	7.0	6.4	0.6	91
신리~ 마평	6	대화 신리	진부 마평	11.2	11.2	-	100
무이~ 상진부	8	봉평 무이	진부 상진부	36.0	24.5	11.5	68
유포~ 면온	10	봉평 유포	봉평 면온	5.5	4.4	1.1	80
유천~ 수하	12	도암 유천	도암 수하	12.5	4.1	8.4	33
용산~ 횡계	13	도암 용산	도암 횡계	6.0	6.0	-	100
화의~ 북평	14	진부 화의	정선 북평	2.0	-	2.0	0
횡계~ 수하	15	도암 횡계	도암 수하	12.7	9.7	3.0	76
속사~ 봉산	16	용평 속사	진부 봉산	15.6	13.6	2.0	87
진조~ 유포	17	봉평 진조	봉평 유포	6.0	2.0	4.0	33
진조~ 둔내	18	봉평 진조	횡성 둔내	3.5	3.5	-	100

未鋪裝 路線 今後 整備計劃

(단위: ㎞/백만원)

노선명	노선 번호	총연장	기추진	미포장	정 비 계 획			비고
					2009	2010	2011이후
계	11개 노선	158.2	80.7	77.5	4.7/ 14,486	4.4/ 23,000	68.4/ 140,000
종부~ 하안미	1	18.5	8.7	9.8	-	2.0/ 4,000	7.8/ 16,000
주진~ 방림	3	15.0	4.0	11.0	2.1/ 6,557	1.0/ 2,000	7.9/ 16,000	ㆍ뇌운구간 재해위험지구 및 군도사업 병행추진(08~10)
계촌~ 대화	4	27.4	3.3	24.1	0.3/ 3,746	0.4/ 15,000	23.4/ 48,000	ㆍ개촉지구 정비사업으로 추진중 - 대화~개수‘09터널 총가발주 하여 년차사업 추진
한탄~ 마하	5	7.0	6.4	0.6	0.6/ 1,933	-	-	ㆍ재해위험지구 정비사업으로 ‘09년 전구간 사업완료
무이~ 상진부	8	36.0	24.5	11.5	-	-	11.5/ 24,000
유포~ 면온	10	5.5	4.4	1.1	1.1/ 1,350	-	-	ㆍ‘07부터 년차사업으로 시행하여 ‘09년 전구간 사업완료 계획
유천~ 수하	12	12.5	4.1	8.4	0.6/ 900	1.0/ 2,000	6.8/ 14,000	ㆍ올림픽대비 교통망 확충노선
화의~ 북평	14	2.0	0	2.0	-	-	2.0/ 4,000
횡계~ 수하	15	12.7	9.7	3.0	-	-	3.0/ 6,000
하진부~ 봉산	16	15.6	13.6	2.0	-	-	2.0/ 4,000
진조~ 유포	17	6.0	2.0	4.0	-	-	4.0/ 8,000

邑面別 農漁村道路 現況

읍면별	노선별	노선수	총연장	포장연장	미포장연장	포장율
합 계		90	400	219.1	180.9	55
평창읍	소 계	12	55.5	28.1	27.4	51
	면 도	1	7.0	1.0	6.0	14
	리 도	8	38.2	22.1	16.1	58
	농 도	3	10.3	5.0	5.3	49
미탄면	소 계	12	61.6	34.9	26.7	57
	면 도	2	12.2	8.6	3.6	71
	리 도	6	34.4	20.8	13.6	61
	농 도	4	15.0	5.5	9.5	37
방림면	소 계	8	32.5	15.1	17.4	47
	면 도	0	-	-	-	-
	리 도	5	20.8	9.1	11.7	44
	농 도	3	11.7	6.0	5.7	51
대화면	소 계	12	48.5	24.8	23.7	51
	면 도	1	5.6	1.4	4.2	25
	리 도	7	28.8	15.6	13.2	54
	농 도	4	14.1	7.8	6.3	55
봉평면	소 계	10	44.8	26.4	18.4	59
	면 도	1	7.0	2.4	4.6	34
	리 도	8	35.1	22.5	12.6	64
	농 도	1	2.7	1.5	1.2	57
용평면	소 계	5	24.8	16.3	8.5	66
	면 도	1	3.7	2.1	1.6	57
	리 도	2	13.0	9.5	3.5	73
	농 도	2	8.1	4.7	3.4	58
진부면	소 계	15	62.6	37.2	25.4	59
	면 도	-	-	-	-	-
	리 도	12	55.8	33.7	22.1	60
	농 도	3	6.8	3.5	3.3	52
대관령면	소 계	16	69.7	36.3	33.4	52
	면 도	-	-	-	-	-
	리 도	10	56.4	29.8	26.6	53
	농 도	6	13.3	6.5	6.8	49

(단위: ㎞, %)

農漁村道路 整備計劃

년도별	읍면별	사업명	노선 번호	도 로 연 장			사 업 계 획		비고
				총연장	포 장	미포장	사업량	사업비
계		23		135.9	75.8	60.1	20.2	21,244
2006	소계	4		23.6	14.2	9.4	3.8	3,900
	평 창	하일~원당	평창201	10.0	5.5	4.5	1.4	1,000
	용 평	이목정~신리	용평101	3.7	1.9	1.8	0.4	600
	진 부	송정~신기	진부211	3.8	3.2	0.6	1.0	1,500
	대관령	횡계~횡계2	도암208	6.1	3.6	2.5	1.0	800
2007	소계	3		10.2	5.1	5.1	2.5	2,500
	방 림	운교2~계촌4	방림204	1.9	1.3	0.6	0.6	600
	대 화	상안미4~상안미2	대화206	4.8	2.5	2.3	1.0	1,000
	봉 평	평촌1~평촌2	봉평203	3.5	1.3	2.2	0.9	900
2008	소계	6		42.6	24.8	17.8	3.8	4,854
	평 창	여만~여만	평창301	4.0	1.3	2.7	0.4	500
	미 탄	창리~평안	미탄201	12.1	8.5	3.6	0.6	700
	진 부	두일~두일	진부202	5.0	4.0	1.0	0.4	960
	진 부	간평~간평	진부203	6.9	3.7	3.2	0.8	800
	진 부	송정~호명	진부210	8.5	3.5	5.0	0.5	1,194
	대관령	횡계~횡계	도암208	6.1	3.8	2.3	1.1	700
2009	소계	5		27.2	11.8	15.4	5.0	3,690
	평 창	조둔~조둔	평창101	7.0	1.0	6.0	0.9	800
	방 림	운교~운교	방림303	2.7	1.5	1.2	0.9	700	총가발주
	봉 평	덕거~덕거	봉평101	7.0	2.4	4.6	1.1	500	총가발주
	진 부	상진부~두일	진부205	4.4	2.0	2.4	0.5	890
	대관령	횡계~횡계	도암208	6.1	4.9	1.2	1.6	800	총가발주
2010	소계	5		32.3	19.9	12.4	5.1	6,300
	미 탄	창리~평안	미탄201	12.1	9.1	3.0	1.0	2,000
	방 림	운교~운교	방림303	2.7	1.5	1.2	0.9	400
	봉 평	덕거~덕거	봉평101	7.0	2.4	4.6	1.1	1,100
	진 부	상진부~두일	진부205	4.4	2.0	2.4	0.94	1,900
	대관령	횡계~횡계	도암208	6.1	4.9	1.2	1.6	1,800

(단위: ㎞, 백만원)

※2009년도 총가발주사업 추경예산 확보시 2010년 사업계획 변동됨

농촌마을길 및 농로 현황

읍면별	자연부락수	수혜가구	총연장	포장	미포장	포장율
계	1,155	8,922	806.7	492.2	314.5	61
마을길	307	4,752	224.8	204.3	20.5	91
농 로	848	4,170	581.9	287.9	294.0	49
평창읍	80	1,401	70.4	40.9	29.4	58
마을길	25	759	28.6	24.8	3.8	87
농 로	55	642	41.8	16.1	25.6	39
미탄면	54	397	59.9	44.0	15.9	74
마을길	5	69	11.8	10.3	1.5	87
농 로	49	328	48.1	33.7	14.4	70
방림면	107	521	75.1	45.2	30.0	60
마을길	11	170	11.7	8.6	3.10	74
농 로	96	351	63.4	36.6	26.9	58
대화면	170	1,212	120.3	75.1	45.3	62
마을길	35	485	32.3	29.7	2.6	92
농 로	135	727	88.0	45.4	42.7	52
봉평면	189	1,197	102.9	80.0	22.9	78
마을길	44	527	38.5	36.8	1.7	96
농 로	145	670	64.4	43.2	21.2	67
용평면	228	965	130.5	77.3	53.2	59
마을길	45	624	29.8	27.5	2.3	92
농로	183	341	100.7	49.8	50.9	49
진부면	195	2,117	144.1	70.6	73.5	49
마을길	99	1,513	35.4	31.3	4.1	88
농 로	96	604	108.7	39.3	69.4	36
대관령	132	1,112	103.5	59.1	44.4	57
마을길	43	605	36.7	35.3	1.4	96
농 로	89	507	66.8	23.8	43.0	36

(단위: ㎞, %)

最近 4年間 邑面別 마을길 投資現況

(단위: ㎞, 백만원)

읍면별	계		2005년도		2006년도		2007년도		2008년도
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	65.7	9,645	20.0	2,813	14.8	2,165	14.0	2,247	16.9	2,420
평창읍	11.5	1,743	4.3	596	2.6	383	2.0	294	2.6	470
미탄면	9.5	790	2.0	280	1.1	153	1.4	202	5.0	155
방림면	5.3	1,007	1.7	250	1.5	217	1.2	355	0.9	185
대화면	7.4	1,222	3.0	420	1.5	215	1.7	252	1.2	335
봉평면	7.6	1,022	1.6	225	2.0	293	1.5	219	2.5	285
용평면	6.5	1,020	1.8	257	2.1	307	2.0	306	0.6	150
진부면	11.4	1,685	4.0	554	2.4	352	2.3	339	2.7	440
대관령면	6.5	1,156	1.6	231	1.6	245	1.9	280	1.4	400