특  수  공  시

-  목   차  -

1. 신활력사업(브랜드강화)

2. 민물고기 생태관 건립

3. 대화위생매립장 재이용 정비사업

4. 소도읍개발사업

5. 대화 하수종말처리장 건설

ꊱ 신활력사업 (브랜드 강화사업)

○ 평창군의 고원 청정한 지리적 특성을 상징하는 "HAPPY700"

브랜드를 지역농업과 농촌관광의 활성화를 위한 핵심자원으로

특화하여 주민소득 증대 및 자립형 지방화로 나갈 수 있는 혁신

시스템 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005. 8. ~2007. 12.

○ 사업규모 : 3개분야 24개사업

지역혁신체계구축 (8개사업)		- 지역혁신역량강화를 위한 네트워크 및 학습체계 구축 (아카데미, 포럼, 기술교육, 조직구성)
브랜드명품화 사업 (7개사업)		- 브랜드 명품화를 위한 생산기반 및 재배기술 확대 - 브랜드 심사기준 마련, 연합마케팅 및 홍보
브랜드체험관광 사업 (9개사업)		- 농촌관광활성화를 위한 기반구축 (서비스표준화, 홍보, 안내시스템구축, 등)

○ 총사업비 : 8,260백만원 (국비 7,635, 군비 40, 자부담등 585)

□ 사업진행현황

○ 신활력사업계획 승인 : 2005. 4.

○ 사업추진 사업단 조직결성 : 2005. 6.

○ 평창군 그린투어센터 개소 : 2005. 9. ~ 지속

○ HAPPY700 공동브랜드로 연합마케팅 추진 : 2005. 9. ~ 지속

○ 농촌관광 활성화 사업 추진 : 2005. 9. ~ 지속

○ 포럼 및 아카데미 사업 추진 : 2005. 10. ~ 지속

○ 농특산물평창군수 품질인증조례 제정 및 추진 : 2005.11. ~ 지속

□ 관련사진

○  사업체계

○  브랜드 상품

ꊲ 민물고기 생태관 건립

○ 동강댐 백지화, 생태계 보전지역, 자연휴식지 지정 등으로 어려운

지역경제 살리는 계기를 마련하고, 국민들의 자연생태계에 대한

자성과 교육의 기회 제공

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 미탄면 마하리 324외 2필지

○ 사업기간 : 2003. 1 ~ 2008. 6

○ 사업규모 : 대지10,350㎡ 생태관1,627㎡(지하1층,지상2층)

○ 사업내용 : 민물고기 생태관1동, 어종연구시설 1식,

연못2개소, 조경(휴식광장등)1식,

동강의 민물고기 등 전시

○ 총사업비 : 8,900백만원 (국비 4,450, 도비 2,068, 군비 2,382)

□ 사업진행현황

○ 동강유역 생태탐방 활성화를 위한 연구용역 : ‘02. 9. ～ ‘03. 10.

○ 설계경기 현상공모 : ‘04. 3. ～ ‘04. 7.

○ 기본 및 실시설계 : ‘04. 9. ～ ‘05. 3.

○ 공사 착공 : ‘06. 4.

□ 관련사진 (조감도)

ꊳ 대화위생매립장 재이용 정비사업

○ 2000년 7월부터 대화매립장을 사용하여 2005년 12월까지 사용으로

매립용량이 포화되어 더 이상 폐기물 매립이 곤란하여 2007년 12월

매립장 사용종료시까지 요한 매립용량을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 대화면 대화리 734-1

○ 사업규모 : 50,000㎥의 매립공간을 확보

(매립폐기물 굴착‧선별하여 압축)

○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2006. 9

○ 총사업비 : 1,000백만원 (군비 1,000)

□ 사업진행현황

○ 지방재정투‧융자심사(자체) : 2005. 9. 12.

○ 실시설계 : 2006. 3. 13.

○ 공사 및 착공 : 2006. 4. 5.

○ 공사 완공 : 2006. 9. 19.

□ 관련사진 (공사현장사진)

ꊴ 평창소도읍육성사업

○ 아름다운 평창강과 어우러지는“Happy700 청정평창”으로 육성

○ 평창군 수부도시 기반여건 조성

○ 머물러 가는 평창, 다시 오고픈 평창으로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 평창읍 시가지 일원

○ 사업기간 : 2003. 6. ~2006. 12.

○ 사업규모 : 도시계획도로개설사업외 8개사업

○ 사업내용 :

- 지역사업진흥사업 : 평창5일장아케이트 및 환경정비사업

- 도시기반시설확충사업 : 장기 미집행 도시계획도로개설사업

- 주민생활환경개선사업 : 자전거도로조성사업, 주차공원조성사업

중리어린이공원 조성사업, 가로환경정비,

향동리 및 하2리 마을진입로 확장사업

- 문화 및 관광육성사업 : 중리다목적캠핑장조성사업,

노성산등산로 및 야생화원조성사업

○ 총사업비 : 17,143백만원(국비 10,843, 도비 1,200, 군비 5,100)

□ 사업진행현황

○ 평창소도읍육성사업 추진 기획단 설치 : 2003. 01.

○ 소도읍육성사업 기본 및 실시설계 추진계획 수립 : 2003. 06.

○ 소도읍육성계획수립을 위한 주민설명회 개최 : 2003. 07.

○ 평창소도읍종합육성사업 협약서 체결 : 2003. 07.

○ 향동리 및 하2리 진입도로 확포장공사 완료 : 2004. 12.

○ 도시계획도로 개설사업(6개노선) 완료 : 2005. 12.

○ 중리다목적캠핑장조성사업외 6개사업 완료 : 2006. 12.

□ 관련사진

○ 평창소도읍육성사업(중리가로환경정비 전․후)

○ 평창소도읍육성사업(중리다목적캠핑장조성 전․후)

ꊵ 대화하수종말처리장(민간투자사업)

○ 생활 오․폐수의 처리로 청정관광 이미지제고 및 도시환경개선

○ 고도처리를 통한 하천생태계 보전 및 한강수계 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 평창군 대화면 하안미리 2055-7번지

○ 사업기간 : 2004. 8. ~ 2007. 10.

○ 사업내용 : 하수처리장 신설 및 하수관로 설치

○ 사업규모 : 시설용량 1,000톤/일, 차집관로 4.3km

○ 처리방법 : MBR(Membrane Bio-Reactor)공법

○ 총사업비 : 10,005백만원 (국비 6,068, 군비 1,340, 기금 2,597)

□ 사업진행현황

○ 민간제안 사업제안서 접수(최초제안자 → 평창군) : 2002. 6.

○ 민간제안 사업제안서 검토의뢰(평창군 → PICKO) : 2002. 7.

○ 검토의견서 제출(PICKO → 평창군) : 2002. 8.

○ 민간투자사업 심의위원회운영 조례 제정 : 2003. 1

○ 민간투자사업심의위원회 개최(평창군) : 2003. 3.

○ 제3자 제안공고 : 2003. 4.

○ 우선협상대상자 지정 : 2003. 5.

○ 협상(PICKO) 및 실시협약(안) 체결 : 2003. 6 ~ 2004. 2

○ 사업추진관련 주민설명회 개최 : 2003. 10.

○ 실시협약(안) 의회보고설명 : 2004. 2.

○ 실시협약 체결 : 2004. 3.

○ 사업시행자 지정통보(평창군→사업제안자) : 2004. 3.

○ 법인설립(맑은평창 주식회사) : 2004. 3.

○ 실시설계 기술심의 및 경관심의 완료 : 2004. 3.

○ 실시계획승인신청서 제출(맑은평창(주)→평창군) : 2004. 4.

○ 실시계획승인 협의요청(평창군→환경부) : 2004. 4.

○ 실시계획협의 의견통보(환경부→평창군) : 2004. 6.

○ 대화처리장 위치변경 및 문화마을 오수처리장 관련
원주지방환경청과 사전 협의 : 2004. 7.

○ 실시계획 승인 : 2004. 7.

○ 하수도정비 기본계획의 대화처리장 위치변경 승인                   (환경부→평창군) : 2004. 9.

○ 실시계획 변경 승인(원주지방환경청→평창군) : 2005. 8.

○ 대화처리장 실착공 : 2005. 12.

○ 대화처리장 시운전 준비중(공정율 95.0%) : 2007. 7.현재

□ 관련사진

○ 조감도