평창군고시 제2016-17호

평창군 평창읍 소재지종합정비사업

기본계획 고시

평창읍 소재지종합정비사업 기본계획에 대하여 농어촌정비법 제58조 같은법시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2016년   02월   26일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 평창읍

사무소 건설담당(☏ 033-330-2671)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창읍 소재지종합정비사업

기본계획서

2016.  02.

	평창군

	한국농어촌공사 원주지사

평창읍(읍면소재지종합정비사업) 기본계획서

1. 사업개요

❍ 위    치 : 평창군 평창읍 중리, 하리

❍ 면    적 : 310㏊(농경지 39, 임야 33, 기타 238)

❍ 가구 및 인구 : 1,679호(농가 314, 비농가 1,365),  4,239명(남 2,143, 여 2,096)

❍ 사 업 량 : 3개부문 10개사업 (H/W 5개사업, S/W 5개사업)

[H/W사업 기본계획]

- 청소년문화센터 및 다목적광장, 지역주민 어울림공간, 재래시장 명품거리

- 종부교 경관개선, 청소년 특화거리

[S/W사업 기본계획]

- 교육부문(주민교육, 리더교육, 선진지견학)

- 컨설팅부문(읍면활성화, 브랜드)

- 홍보·마케팅(읍소재지 축제지원, 마을소식지 제작)

- 정보화(정보화기기 구축)

- 마을경영지원(전문가 자문료, 추진위원회 지원)

❍ 사 업 비 : 9,510백만원(국비 6,510, 지방비 3,000, 민간부담 7)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년간)

2. 추진경위

❍ 기본계획수립 착수 : ’14. 03. 03

❍ 추진위 및 주민 설명회 개최 : ‘14. 04. 02

❍ 청소년문화센터 및 다목적광장 토지주 사업설명회 개최 :‘14. 06. 20

❍ 기본계획(안) 추진위 설명회 개최 : ‘14. 11. 05

❍ 기본계획(안) 사전설명회(강원도청) : ‘14. 12. 18

3. 총사업비: 9,517백만원(보조 9,510백만원, 자부담 7백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	년도별내역
		2014년	2015년	2016년	2017년
합계	9,517	964	886	3,800	3,867
국비	6,657	670	620	2,660	2,707
지방비	2,853	287	266	1,140	1,160
민간부담	7	7	-	-	-

4. 기능별 사업내역

(단위 : 천원)

사업명	제안서		기본 계획		증감 내역		사유
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		-		(7,000)		(7,000)
		10,000,000		9,510,000		△490,000
❍기초생활기반확충		5,520,000		5,616,000		96,000
- 청손년문화센터 및 다목적광장	1식	2,960,000	1,089㎡	4,904,000		1,944,000
- 지역주민 어울림공간	1식	800,000	707㎡	182,000		△618,000
- 재래시장 명품거리	1식	1,760,000	L=390m	530,000		△1,230,000
❍지역경관개선		2,668,000		2,445,000		△223,000
- 종부교 경관개선	1식	760,000	A=930㎡	731,000		△29,000
- 청소년 특화거리	1식	1,908,000	L=735m	1,714,000		△194,000
❍지역역량강화		-		(7,000)		(7,000)
		316,000		371,000		55,000
- 교육부분	1식	-	1식	(7,000)		(7,000)
		236,000		253,000		17,000
- 컨설팅부분	1식	20,000	1식	55,000		35,000
- 홍보·마케팅	1식	60,000	1식	22,000		△38,000
- 정보화	-	-	1식	16,000		16,000
- 마을경영지원	-	-	1식	25,000		25,000
❍ 제경비		1,496,000		1,078,000		△418,000
- 기본계획수립비	1식	220,000	1식	120,000		△100,000
- 세부설계비	1식	216,000	1식	189,000		△27,000
- 공사감리비	1식	508,000	1식	432,000		△76,000
- 사업관리비	1식	105,000	1식	108,000		3,000
- 잡지출	1식	447,000	1식	49,000		△218,000
- 농어촌경관형성계획	1식		1식	150,000
- 일반농산어촌사업지원비	1식		1식	30,000

5. 기본계획 승인내역

(수  입)                                                             (단위:천원)

구 분	기본계획	기본계획(연차별)				비 고
		계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	(7,000) 9,510,000	(7,000) 9,510,000		(7,000) 9,510,000
국 비	6,657,000	6,657,000		6,657,000
지방비	2,853,000	2,853,000		2,853,000
민간부담	7,000	7,000		7,000

(지  출)                                                             (단위:천원)

구 분	기본계획	기본계획(연차별)				비 고
		계	기승인	금회승인	향후 계획
합 계	(7,000)	(7,000)		(7,000)
	9,510,000	9,510,000		9,510,000
❍ 공사비	(7,000)	(7,000)		(7,000)
	8,432,000	8,432,000		8,432,000
- 기초생활기반확충	5,616,000	5,616,000		5,616,000
- 지역경관개선	2,445,000	2,445,000		2,445,000
- 지역역량강화	(7,000)	(7,000)		(7,000)
	371,000	371,000		371,000
❍ 제경비	1,078,000	1,078,000		1,078,000
- 기본계획수립비	120,000	120,000		120,000
- 세부설계비	189,000	189,000		189,000
- 공사감리비	432,000	432,000		432,000
- 사업관리비	108,000	108,000		108,000
- 잡지출	49,000	49,000		49,000
- 농어촌경관형성계획	150,000	150,000		150,000
- 일반농산어촌사업지원비	30,000	30,000		30,000

※ ( ) : 자부담 별도

6. 기능별 사업비(량) 증감사유서

(단위:천원)

구 분		총 괄 계
합 계		제안서(A)	기본계획(B)	증감(B-A)	증감 사유
계		4개 부분	4개 부분
기초 생활 기반 확충	청소년 문화센터 및 다목적 광장	❍사업비: 2,960,000 ❍사업량 - 문화센터건립(1,000㎡) - 태양광 시설(40kw) - 편의시설, 조경 - 부지조성(1,556㎡)	❍사업비: 4,904,000 ❍사업량 - 문화센터(1,089㎡) - 태양광발전기(40kw) - 편의시설1식 - 부지조성(2,321㎡) 외	❍사업비 증 1,944,000
	지역주민 어울림공간	❍사업비: 800,000 ❍사업량 - 부지조성(1,800㎡), 조경 - 편의시설 - 올림픽조형물 설치	❍사업비: 182,000 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 편의시설1식 - 조경식재(300㎡) 외	❍사업비 감 618,000
	재래시장 명품화 거리	❍사업비: 1,760,000 ❍사업량 - 비가림시설(L=120m) - 경관가로등 설치 20기 - 명품거리 조성(L=250m) - 종합안내판 설치2개소	❍사업비: 530,000 ❍사업량 - 도로정비(L=390m) - 콘크리트블럭포장 (2,340㎡) - 관문4개소 - 편의시설1식 외	❍사업비 감 1,230,000
지역 경관 개선	종부교 경관개선	❍사업비:760,000 ❍사업량 - 야간조명 설치20기 - 교면 재포장(1,200㎡) - 쉼터 등 편의시설4개소 - 포토존 조성2개소 - 조형물 설치1식	❍사업비: 731,000 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설5개소 - 캐노피 (시점L=15m,종점L=10m) - 조형물1식 외	❍사업비 감 29,000
	청소년 특화거리	❍사업비: 1,908,000 ❍사업량 - 포토갤러리 설치 - 경관벽면 조성(2,500㎡) - 차도 정비(1,000㎡) - 인도 정비(2,000㎡) - 조형물 설치2개소 - 경관가로등 설치50개소 - 조명 시설2개소 - 전선지중화(L=550m)	❍사업비: 1,714,000 ❍사업량 - 이야기그림벽(L=90m) - 도로정비(L=735m) - 가로등46개소 - 편의시설4개소 - 안전휀스410경간 - 도로포장 (일방통행로L=220m) - 전선지중화(L=350m)	❍사업비 감 194,000
지역 역량 강화 사업		❍사업비: 316,000 ❍사업량 - 교육부분 - 홍보마케팅부분 - 컨설팅부분	❍사업비: 371,000 (7,000) ❍사업량 - 교육부분 - 홍보마케팅부분 - 정보화부분 - 컨설팅부분 - 마을경영지원	❍사업비 증 55,000
제경비		❍사업비: 1,496,000 ❍사업량 - 기본계획비 1식 - 세부설계비 1식 - 공사감리비 1식 - 기타부대비 1식	❍사업비: 1,078,000 ❍사업량 - 기본계획비 1식 - 세부설계비 1식 - 공사감리비 1식 - 사업관리비 1식 - 농어촌경관형성 1식 - 기타부대비 1식	❍사업비 감 418,000

7. 사업비 수지예산서

(수  입)                                                              (단위:천원)

구 분	기본계획	기본계획(연차별)					비 고
		계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	(7,000) 9,510,000	(7,000) 9,510,000	(7,000) 957,000	(-) 886,000	(-) 3,800,000	(-) 3,867,000
국 비	6,657,000	6,657,000	670,000	620,000	2,660,000	2,707,000
지방비	2,853,000	2,853,000	287,000	266,000	1,140,000	1,160,000
민간부담	7,000	7,000	7,000

(지  출)                                                              (단위:천원)

구 분		승인액	기본계획(연차별)					비 고
			계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계		(7,000)	(7,000)	(7,000)	(-)	(-)	(-)
		9,510,000	9,510,000	957,000	886,000	3,800,000	3,867,000
기초생활 기반확충	소 계	5,616,000	5,616,000	354,000	738,000	2,716,000	1,808,000
	청소년문화센터 및 다목적광장	4,904,000	4,904,000	354,000	738,000	2,004,000	1,808,000
	지역주민 어울림공간	182,000	182,000	-	-	182,000	-
	재래시장 명품거리	530,000	530,000	-	-	530,000	-
지역 경관개선	소 계	2,445,000	2,445,000	-	-	762,000	1,683,000
	종부교 경관개선	731,000	731,000	-	-	-	731,000
	청소년 특화거리	1,714,000	1,714,000	-	-	762,000	952,000
지역역량 강화	소 계	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(-)	(-)	(-)
		371,000	371,000	85,000	83,000	111,000	92,000
	교육부분	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(-)	(-)	(-)
		253,000	253,000	81,000	46,000	63,000	63,000
	컨설팅부분	55,000	55,000	-	20,000	15,000	20,000
	홍보·마케팅	22,000	22,000	-	10,000	10,000	2,000
	정보화	16,000	16,000	-	-	16,000	-
	마을경영지원	82,000	82,000	16,000	22,000	22,000	22,000
제경비	소 계	1,078,000	1,078,000	518,000	65,000	211,000	284,000
	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-	-	-
	세부설계비	189,000	189,000	189,000	-	-	-
	공사감리비	432,000	432,000	43,000	40,000	147,000	202,000
	사업관리비	108,000	108,000	11,000	10,000	37,000	50,000
	잡지출	49,000	49,000	5,000	5,000	17,000	22,000
	농어촌경관형성	150,000	150,000	150,000	-	-	-
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	30,000	-	10,000	10,000	10,000