평창군 고시 제 2016-28호

평창군 평창읍 소재지종합정비사업

시행계획 고시

평창읍 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2016년   3월  25일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 평창읍

사무소 건설담당(☏ 033-330-2671)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창읍 소재지종합정비사업 시행계획서

1. 사업개요

❍ 위    치 : 평창군 평창읍 중리, 하리 일원

❍ 면    적 : 310㏊(농경지 39, 임야 33, 기타 238)

❍ 가구 및 인구 : 1,679호(농가 314, 비농가 1,365),  4,239명(남 2,143, 여 2,096)

❍ 사 업 량 : 3개부문 10개사업(H/W 5개사업, S/W 5개사업)

[H/W사업 기본계획]

- 지역주민 어울림공간(1차년도), 재래시장 명품거리(1차년도), 청소년 특화거리(1차년도)

- 청소년문화센터 및 다목적광장(2차년도), 종부교 경관개선(2차년도)

[S/W사업 기본계획]

- 교육부문(주민교육, 리더교육, 선진지견학), 컨설팅부문(읍면활성화, 브랜드)

- 홍보·마케팅(읍소재지 축제지원, 마을소식지 제작), 정보화(정보화기기 구축)

- 마을경영지원(전문가 자문료, 추진위원회 지원)

❍ 사 업 비 : 9,510백만원(국비 6,510, 지방비 3,000, 자부담 7)

▶ 자부담은 총 사업비에 미포함

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4개년)

2. 추진경위

❍ 기본계획수립 착수 : ’14. 03. 03

❍ 평창읍 기본계획협의(강원도청) : ‘14. 12. 18

❍ 평창읍 기본계획 승인(평창군) : ‘15. 03. 23

❍ 경관형성계획 용역시행(주경) : ‘15. 04. 23

❍ 세부설계 용역시행(청강) : ‘15. 05. 28

❍ 경관형성계획 용역준공(주경) : ‘15. 12. 18

❍ 세부설계 용역준공(청강) : ‘15. 12. 17

❍ 시행계획 승인요청 : ‘16. 03.

3. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	9,510	957	886	3,046	4,621	<>외서:자부담
국 비	6,510	670	620	2,132	3,088
지 방 비	3,000	287	266	914	1,533
민간부담	<7>	<7>	-	-	-

4. 사업비 수지예산서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획			비고
		합 계	기승인	금회승인
합 계	9,510,000	9,510,000	491,000	9,019,000
국 비	6,510,000	6,510,000	343,700	6,166,300
지방비	3,000,000	3,000,000	147,300	2,852,700
자부담	<7,000>	<7,000>	<7,000>	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획			비고
			합 계	기승인	금회승인
합 계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<7,000> 491,000	<-> 9,019,000	<>:외서: 자부담
기초생활기반확충	청소년문화센터 및 다목적광장	4,904,000	4,904,000	-	4,904,000
	지역주민 어울림공간	182,000	244,865	-	244,865
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	-	589,430
지역경관개선	청소년특화거리	1,714,000	1,760,848	-	1,760,848
	종부교경관개선	731,000	561,857	-	561,857
역량강화	지역역량강화	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	-
기타	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	189,000	189,000	-	189,000
	공사감리비	432,000	432,000	-	432,000
	사업관리비	108,000	108,000	-	108,000
	잡지출	49,000	49,000	-	49,000
	농어촌경관형성계획비	150,000	150,000	-	150,000
	일반농산어촌사업지원비	30,000	30,000	-	30,000

5. 세부사업계획

사 업 명	기본계획	시행계획	비고
계	6개사업	5개사업
청소년문화센터 및다목적광장	❍사업비: 4,904,000 ❍사업량 - 문화센터(1,089㎡) - 발전기(40kw) - 편의시설1식 - 부지조성(2,321㎡) 외	❍사업비: 4,904,000 ❍사업량 - 문화센터(1,089㎡) - 발전기(40kw) - 편의시설1식 - 부지조성(2,321㎡) 외
지역주민 어울림공간	❍사업비: 182,000 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 편의시설1식 - 조경식재(300㎡) 외	❍사업비: 244,865 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 부지포장(경계석281m, 인조화강블럭(435㎡), 블럭, 고무칩포장, 디딤석포장) - 편의시설1식(수목보호대,파고라,등의자외) - 조경식재(250㎡) 외 - 공원등5개소
재래시장 명품거리	❍사업비: 530,000 ❍사업량 - 도로정비(L=390m) - 콘크리트블럭포장(2,340㎡) - 관문4개소 - 편의시설1식 외	❍사업비: 589,430 ❍사업량 - 부지조성및부대시설(2,340㎡) - 인조화강석블럭포장(2,920㎡) - 관문게이트1식,조형게이트2식 - 블럭22EA - 경계석910m
청소년 특화거리	❍사업비: 1,714,000 ❍사업량 - 이야기그림벽(L=90m) - 도로정비(L=735m) - 가로등46개소 - 편의시설4개소 - 안전휀스410경간 - 도로포장(일방통행로L=220m) - 전선지중화(L=350m)	❍사업비: 1,760,848 ❍사업량 - 도로정비및부대공사1식 - 포장(인조화강석블럭A=2,880㎡) - LED가로등14개소 - 안전휀스159경간 - 전선지중화(L=350m) - 경계석(516m)
종부교 경관개선	❍사업비: 731,000 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설5개소 - 캐노피 (시점L=15m,종점L=10m) - 조형물1식 외	❍사업비: 731,000 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설5개소 - 캐노피 (시점L=15m,종점L=10m) - 조형물1식 외
지역역량 강화	❍사업비: 371,000 (7,000) ❍사업량 - 교육부분 - 홍보마케팅부분 - 정보화부분 - 컨설팅부분 - 마을경영지원		기승인

6. 기능별사업비 변경비율                          (단위 : 천원)

사업명		기본계획	시행계획	증(△)감	절대값	변경비율
합계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	-	338,286	3.6%
기초 생활 기반	<소계>	5,616,000	5,738,295	122,295	122,295	2.2%
	청소년문화센터 및다목적광장	4,904,000	4,904,000	-	-
	지역주민 어울림공간	182,000	244,865	62,865	62,865
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	59,430	59,430
지역 경관 개선	<소계>	2,445,000	2,322,705	∆122,295	215,991	8.8%
	청소년 특화거리	1,714,000	1,760,848	46,848	46,848
	종부교 경관개선	731,000	561,857	∆169,143	169,143
지역 역량 강화	<소계>	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	-	-	0.0%
	교육	<7,000> 253,000	<7,000> 253,000	-	-
	컨설팅	55,000	55,000	-	-
	홍보마케팅	22,000	22,000	-	-
	정보화	16,000	16,000	-	-
	마을경영	25,000	25,000	-	-
제경비	부대비용	1,078,000	1,078,000	-	-	0.0%

※ 지역개발사업 시설물 등 설치·운영 기준(`16.03.01.) 제1장 제3조2항에 따라 (기능별 사업비 기준 절대값 60%미만 변경시) 시장·군수 승인