사 업 계 획 서

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년도 공동주택 유지보수 지원사업

(공사명 : 000아파트 외벽 도색공사)

○ 사업목적 : 단지내 아파트 외벽의 탈색 및 박리현상 등으로 도시 경관 및 주거환경                   을 저해하고 단지의 이미지를 훼손하고 있기에 아파트 외벽 도색공사를                   통하여 쾌적한 주거환경개선은 물론 평창 동계올림픽 개최도시로써의                    면모를 갖추고자 함

○ 사업위치 : 평창군 평창읍 0리 000번지  000아파트

○ 사업내용 : 단지내 아파트 외벽 도색 3,226㎡

○ 사업기간 : 2016 . 3월 ~ 12월

○ 소요경비 내역 : 총사업비 25,300천원                                                                                                                    (단위:천원)

공사명	설계금액 (총사업비)	계약금액	보조금액	자부담	보조율	비고
000아파트 외벽도색공사	25,300	미계약	12,650	12,650	50%

□ 산출내역(상세내역:“공사내역서”참조)

○ 외벽 도색 3,226㎡  = 16,642천원

○ 제경비 1식 = 8,658천원

* 합 계 : 25,300천원

□ 집행계획

○ 공개입찰 : 2016. 4월초

○ 시공계약 : 4월중순

○ 공사착수 : 4월말

○ 공사완료 : 5월중

○ 보조금 정산 : 6월말까지

□ 사업 기대효과

○ 단지의 쾌적한 주거환경 확보 및 아파트 이미지 개선

○ 입주민의 삶의 질을 높여 줌

000아파트 입주자대표회의 회장 0 0 0 (인)