평창군 고시 제 2016-95호

평창군 진부면 소재지종합정비사업

시행계획 변경 고시

진부면 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2016년   9월  9일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2014) 및 진부면

사무소 건설담당(☏ 033-330-2677)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

진부면소재지 종합정비사업 시행계획서

(1차변경)

(학교가는길, 공용주차장, 진입로가로정비,문화복지센터 4건)

2016. 09

	평창군

진부면 소재지 종합정비사업 시행계획서[1차변경]

1. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 평창군 진부면 하진부리 일원(상진부리, 송정리)

○ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 스쿨존 및 학교가는길 조성, 문화복지센터

재래시장 공용주차장조성

- 지역경관개선 : 진입관문 및 랜드마크 조성, 진입로 가로경관정비

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2013. 03. 12 : 기본계획 착수

2013. 08. 29 : 진부면 소재지 최종 보고회

2013. 10. 04 : 지역역량강화사업 승인

2013. 12. 31 : 기본계획 승인(강원도)

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2014. 06. 12 : 학교가는길 대상지(C) 시행계획(일부) 승인

2014. 07. 14 : 학교가는길 대상지(C) 조성공사 착공

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2015. 04. 06 : 시행계획승인(진입관문 및 조형물 제외)

2016. 07. 13 : 시행계획승인신청 (진입관문 및 조형물)

2016. 07. 18 : 시행계획승인 (진입관문 및 조형물)

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<17> 7,000	956	1,511	2,256	<17> 2,277	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,579	1,594
◦ 지방비	2,100	287	453	677	683
◦ 민간부담	<17>				<17>

1. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	승인금액	변경승인 금액	증△감	비 고
합 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	699,000	622,312	538,427	△83,885
② 문화복지센터	2,500,000	2,942,328	3,047,189	104,861
③ 재래시장 공용주차장조성	1,341,000	1,086,605	987,283	△99,322
④ 진입관문 및 랜드마크조성	354,000	524,950	524,950	-
⑤ 진입로 가로경관정비	789,000	252,450	264,536	12,086
⑥ 지역역량강화	318,680	318,680	318,680	-
⑦ 제경비	998,320	1,252,675	1,318,935	66,260

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	승인액	변경승인	향후계획
합 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	490,000	490,000	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	210,000	210,000	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	210,000	210,000	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	승인액	변경승인	향후계획
합 계		<16,800> 7,000,000	<16,800> 7,000,000	7,000,000	7,000,000		<>:외서: 자부담
H/W 사업	스쿨존 및 학교가는길 조성	699,000	699,000	622,312	538,427	△83,885
	문화복지센터 조성	2,500,000	2,500,000	2,942,328	3,047,189	104,861
	재래시장 공용주차장 조성	1,341,000	1,341,000	1,086,605	987,283	△99,322
	진입관문 및 랜드마크 조성	354,000	354,000	524,950	524,950
	진입로 가로경관정비	789,000	789,000	252,450	264,536	12,086
S/W 사업	지역역량강화	<16,800> 318,680	<16,800> 318,680	318,680	318,680
	제경비	998,320	998,781	1,252,675	1,318,935	66,260

기능별 사업비(량) 증감사유서

(단위 : 천원)

사 업 명	승인액(A)	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
		변경승인(B)
합 계	6,746,106	7,000,000	253,894
○ 기초생활기반확충	4,651,245	4,572,899
- 스쿨존 및 학교가는길 조성	622,312	538,427	△83,885
-중. 고등학교 앞	289,773	248,447	△41,326	용지매수 및 보상비 감
-초등학교 앞	332,539	289,980	△42,559	관급자재 사업비 감
- 진부 문화복지센터	2,942,328	3,047,189	104,861	건물배치변경, 1,2층 내부마감변경 노후 보도 철거후 신설반영
- 재래시장 공용주차장	1,086,605	987,283	△99,322	조립식 주차장건물 계획에서 지상주차장으로 변경
○ 지역경관개선사업	777,400	789,486	12,086
- 진입관문 및 랜드마크 조성	524,950	524,950	-
- 진입로 가로경관정비	252,450	264,536	12,086	마가목에서 은행나무 변경
○ 지역역량강화	<16,800> 318,680	<16,800> (318,680)	-	사무장비 지급에 따른 마을지원금 증가, 추진위 요청으로 컨설팅추가반영
-교육	<16,800> 176,380	<16,800> 161,514	△14,866
-컨설팅·홍보·정보화	119,000	123,166	4,166
-마을경영	23,300	34,000	10,700
○ 제경비	1,252,675	1,318,935		농어촌정비법에 의한 정산 및 남은 사업비 반영
기본계획,세부설계비,공사감리비 등	1,252,675	1,318,935	66,260	기타부대비 증

사 업 비 수 지 예 산 서

구분		기본계획	승인액	변경 신청액	증 감	증감사유	비고
합 계		<16,800> 7,000,000	<8,000> 6,746,106	<6,974> 7,000,000	-	-
H / W 사 업	스쿨존 및 학교가는길	699,000	622,312	538,427	△83,885	용지매수 및 보상비 감
	문화복지센터	2,500,000	2,942,328	3,047,189	104,861	건물배치변경, 1,2층 내부마감변경 노후 보도 철거후 신설반영
	재래시장 공용주차장	1,341,000	1,086,605	987,283	△99,322	조립식 주차장건물 계획에서 지상주차장으로 변경
	계		4,651,245	4,572,899	△78,346
	진입관문 및 랜드마크	354,000	524,950	524,950	-
	진입로 가로경관정비	789,000	252,450	264,536	12,086	마가목에서 은행나무 변경
	계		777,400	789,486	12,086
S/W 사업		<16,800> 319,000	<16,800> 318,680	<6,974> 318,680	<△9,826> -
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	170,000	109,972	120,208	10,236	실정산액 반영
	공사감리비	409,000	318,200	318,300	100
	사업관리비	86,000	74,100	74,100	-
	잡 지 출	83,000	83,000	83,000
	경관형성계획비	100,000	60,008	74,916	14,908	실정산액 반영
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	30,000	30,000	-
	기타부대비	-	457,395	498,411	41,016	예비비증가
계			1,252,675	1,318,935	66,260