평창군 고시 제 2017-121호

평창군 평창읍 소재지종합정비사업

시행계획 2차 변경 고시

평창읍 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 2차 변경 고시합니다.

2017년   8월  25일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 평창읍

사무소 건설담당(☏ 033-330-2671)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창읍소재지종합정비사업 시행계획서(2차변경)

- 청소년문화센터 세부설계 반영 -

2017. 08.

	평창군

평창읍소재지 종합정비사업 시행계획서(2차변경)

- 청소년문화센터 세부설계 반영 -

1		사업개요

위    치 : 평창군 평창읍 중리, 하리 일원

면    적 : 310㏊(농경지 39, 임야 33, 기타 238)

가구 및 인구 : 1,679호(농가 314, 비농가 1,365),  4,239명(남 2,143, 여 2,096)

사 업 량 : 3개 분야 6개사업

❍ 기초생활기반확충

▸청소년문화센터, 지역주민어울림공간, 재래시장명품거리,

❍ 지역경관개선

▸청소년특화거리, 종부교경관개선

❍ 지역역량강화

▸ 교육, 컨설팅부문, 홍보·마케팅, 정보화 구축, 마을경영지원

사 업 량 : 9,510백만원(국비 6,657, 지방비 2,853, 자부담 7)

※ 자부담은 총 사업비에 미포함

사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4개년)

2		추진경위

기본계획수립 착수     : ‘14. 03. 03

기본계획협의(강원도청)  : ‘14. 12. 18

기본계획 승인(평창군)   : ‘15. 03. 23

경관형성계획 용역시행 : ‘15. 04. 23 (준공 : ’15. 12. 18)

세부설계 용역시행     : ‘15. 05. 28 (준공 : ’15. 12. 17)

시행계획 승인 및 고시 : ‘16. 03. 25 (평창군고시 제2016-29호)

❍ 지역주민어울림공간, 재래시장명품거리, 청소년특화거리 세부설계 반영

시행계획(1차변경) 승인 및 고시 : ‘16. 05. 27 (평창군고시 제2016-58호)

❍ 종부교 경관개선 세부설계 반영

여건변동 승인(1차) : ‘16. 10. 20

❍ 지역주민어울림공간 여건변경 반영

여건변동 승인(2차) : ‘16. 11. 15

❍ 지역주민어울림공간 및 종부교 경관개선 여건변경 반영

시행계획(2차변경) 승인 및 고시 : ‘16. 08. 25 (평창군고시 제2017-121호)

❍ 청소년문화센터 세부설계 반영

3		시행계획변경 내용

청소년문화센터 세부설계에 따른 공사비 확정

(단위 : 천원)

구 분	기승인 (A)	세부설계 결과					증감 (B-A)
		계 (B)	건축․토목 ․기계설비	전기 공사	통신 공사	기존건물 철거 등
계	4,417,896	4,417,896	1,917,143	209,376	42,851	2,248,526
□ 공 사 비	2,228,896	2,228,896	1,915,807	209,376	42,851	60,862	-
□ 폐기물처리	100,000	100,000	1,336	-	-	98,664	-
□ 용지매수보상	2,089,000	2,089,000	-	-	-	2,089,000	-

청소년문화센터 공사기간 확보를 위한 사업기간 연장

구 분	당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	비 고 (증감사유)
공사기간	2014 ～ 2017.12	2014 ～ 2018.12	1년	청소년문화센터 공사기간 확보

4		연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자계획					비 고
	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	9,510	957	886	3,047	4,620	<>외서:자부담
국 비	6,510	670	620	2,132	3,088
지 방 비	3,000	287	266	915	1,532
민간부담	<7>	<7>	-	-	-

5		사업비 수지예산서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	9,510,000	9,510,000	5,092,104	4,417,896	-
국 비	6,657,000	6,657,000	3,564,473	3,092,527	-
지방비	2,853,000	2,853,000	1,527,631	1,325,369	-
- 군 비	2,853,000	2,853,000	1,527,631	1,325,369	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	기승인	금회승인	향후계획
합 계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<7,000> 5,092,104	<-> 4,417,896	<-> -	<>:외서: 자부담
기초생활기반	청소년문화센터	4,904,000	4,417,896	-	4,417,896	-
	지역주민 어울림공간	182,000	244,865	244,865	△13,729	-
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	589,430	-	-
경관개선	청소년특화거리	1,714,000	1,760,848	1,760,848	-	-
	종부교경관개선	731,000	1,147,961	1,147,961	17,325	-
역량 강화	지역역량강화	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<-> -	<-> -
시설부대경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-	-
	세부설계비	189,000	189,000	189,000	-	-
	공사감리비	432,000	432,000	432,000	-	-
	사업관리비	108,000	108,000	108,000	-	-
	잡지출	49,000	45,404	49,000	△3,596	-
	농어촌경관형성계획비	150,000	50,000	50,000	-	-
	일반농산어촌사업지원비	30,000	30,000	30,000	-	-

6		세부사업계획

사 업 명	기 승인(1차변경)	금회시행계획(2차변경)	비고
계	6개사업	3개 사업
청소년 문화센터	❍사업비: 4,417,896천원 ❍사업량 - 문화센터(1,089㎡) - 태양광발전기(40kw) - 편의시설1식 - 부지조성(2,321㎡) 외	❍사업비: 4,417,896천원 ❍사업량 - 문화센터(2층 724㎡) - 태양광발전기(20kw) - 편의시설1식 - 다목적광장(1,496㎡, 주차장․쉼터) 등
지역주민 어울림공간	❍사업비: 244,865천원 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 조경식재(250㎡) - 편의시설(파고라, 등의자 외) - 공원등 5개소 등	❍사업비: 231,136천원(△13,729천원) ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 조경식재(250㎡) - 편의시설(파고라, 등의자 외) - 공원등 5개소 등	여견 변동 1,2차 승인
재래시장 명품거리	❍사업비: 589,430천원 ❍사업량 - 부지조성및부대시설(2,340㎡) - 인조화강석블럭포장(2,920㎡) - 관문게이트1식,조형게이트2식 - 경계석910m 등	기승인 (변경없음)
청소년 특화거리	❍사업비: 1,760,848천원 ❍사업량 - 도로정비및부대공사1식 - 포장(인조화강석블럭A=2,880㎡) - LED가로등14개소 - 전선지중화(L=350m) 등	기승인 (변경없음)
종부교 경관개선	❍사업비: 1,147,961천원 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설 5개소 및 조형물 - 캐노피 등	❍사업비: 1,165,286천원(증17,325천원) ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설 5개소 및 조형물 - 캐노피 등	여견 변동 2차 승인
지역역량 강화	❍사업비: 371,000(7,000)천원 ❍사업량 - 교육부분 - 홍보마케팅부분 - 정보화부분 - 컨설팅부분 - 마을경영지원	기승인 (변경없음)

7		기능별사업비 증감내역

(단위 : 천원)

사업명		기본계획 (A)	시행계획			시행계획(1차) 대비 변경비	비고
			기승인(1차)	금회승인	증·감
합계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<->	<-> -
기초 생활 기반	<소계>	5,616,000	5,252,191	5,238,462	△13,729	0.3%
	청소년 문화센터	4,904,000	4,417,896	4,417,896	-
	지역주민 어울림공간	182,000	244,865	231,136	△13,729
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	589,430	-
지역 경관 개선	<소계>	2,445,000	2,908,809	2,926,134	17,325	0.6%
	청소년 특화거리	1,714,000	1,760,848	1,760,848	-
	종부교 경관개선	731,000	1,147,961	1,165,286	17,325
지역역량강화		<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	-
시설 부대 경비	<소계>	1,078,000	978,000	974,404	△3,596	0.4%
	기본계획수립	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	189,000	189,000	189,000	-
	공사감리비	432,000	432,000	432,000	-
	사업관리비	108,000	108,000	108,000	-
	잡지출	49,000	49,000	45,404	△3,596
	농어촌 경관형성계획	150,000	50,000	50,000	-
	일반농산어촌 사업지원비	30,000	30,000	30,000	-

※기능별사업비(국비) 기준 30% 미만 변경 시 : 시장·군수 협의 및 승인

8		사업시행자 검토의견서

부 문 별	검 토 내 용
청소년 문화센터	< 사 업 개 요 > ⃞ 위 치 : 평창군 평창읍 하리 72-14대 외 7필지, 부지면적 1,876㎡ ⃞ 사업비 : 4,417,896천원 ⃞ 주요시설 ○ 청소년문화센터 건축공사 - 연 면 적 : 724㎡(1층 380㎡, 2층 344㎡), 용적율 : 38.58% - 건축면적 : 415㎡(건폐율 22.15%) - 철근콘크리트구조, 건물높이 지상 2층 12.45m - 전기공사 태양광 20Kw ○ 다목적광장 토목공사 - 부지조성 1,496㎡, 주차장 41면, 쉼터조성 280㎡ - 조경식재 및 편의시설공사 1식 ○ 기존 건축물 철거 및 폐기물처리 공사 - 건축물 철거 : 5동 - 폐기물처리 : 1,510톤 < 조 감 도 > < 검 토 사 항 > ⃞ 기본계획 대비 사업비 증감여부 (감 486,104천원) < 30% : 시장군수 승인사항 ⃞ 단가산출서, 수량산출서, 공사비명세서의 적합성여부 (적합) ⃞ 추진위원회 의견 반영여부 (반영) ⃞ 인.허가 등 관련법 저촉여부 (시행가능)