평창군 고시 제 2017–164 호

평창군 진부면 소재지종합정비사업

시행계획 변경(3차) 고시

진부면 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 변경 고시합니다.

2017년   11월  24일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2015) 및 진부면

사무소 건설담당(☏ 033-330-2677)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

진부면 소재지종합정비사업 시행변경계획 (3차)

2017. 11

	평창군

진부면 소재지종합정비사업 변경시행 계획서(3차)

1. 사업개요

○ 위    치: 강원도 평창군 진부면 하진부리 일원(상진부리, 송정리)

○ 사업기간: 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 주요사업내용

- 기초생활기반확충 : 스쿨존 및 학교가는길 조성, 문화복지센터

재래시장 공용주차장조성

- 지역경관개선 : 진입관문 및 랜드마크 조성, 진입로 가로경관정비

○ 소요사업비 : 7,000백만원(국비: 4,900, 지방비: 2,100)

2. 추진경위

2013. 03. 12 : 기본계획 착수

2013. 08. 29 : 진부면 소재지 최종 보고회

2013. 10. 04 : 지역역량강화사업 승인

2013. 12. 31 : 기본계획 승인(강원도)

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2014. 06. 12 : 학교가는길 대상지(C) 시행계획(일부) 승인

2014. 07. 14 : 학교가는길 대상지(C) 조성공사 착공

2014. 04. 01 : 경관형성계획 및 세부설계 용역 실시

2015. 04. 06 : 시행계획승인(진입관문 및 조형물 제외)

2016. 07. 13 : 시행계획승인신청 (진입관문 및 조형물)

2016. 07. 18 : 시행계획승인 (진입관문 및 조형물)

2016. 09. 09 : 1차 시행계획 변경 승인

2016. 11. 25 : 2차 여건변동 승인

2016. 12. 14 : 3차 여건변동 승인

2017. 07. 31 : 2차 시행계획 변경 승인

3. 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자내역					비 고
	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	<17> 7,000	956	1,511	<7.5> 2,256	2,277	<>:외서: 자부담
◦ 국 비	4,900	669	1,058	1,579	1,594
◦ 지방비	2,100	287	453	677	683
◦ 민간부담	<7.5>			<7.5>

1. 시행계획 승인요청 내역

가. 사 업 비

(단위 : 천원)

사 업 명	기본계획 (A)	변경 승인금액(2차)	금회변경 신청금액	증△감	비 고
합 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
① 스쿨존 및 학교가는 길 조성	699,000	538,388	538,388
② 문화복지센터	2,500,000	3,240,491	3,240,491
③ 재래시장 공용주차장조성	1,341,000	1,356,066	1,345,477	△10,589
④ 진입관문 및 랜드마크조성	354,000	457,700	457,700
⑤ 진입로 가로경관정비	789,000	264,536	264,536
⑥ 지역역량강화	318,680	334,777	349,999	15,222
⑦ 제경비	998,320	808,042	803,409	△4,633

사 업 비 수 지 예 산 서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획				비고
		합 계	변경승인	변경신청	향후계획
합 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
◦ 국 비	4,900,000	4,900,000	490,000	490,000	-
◦ 지방비	2,100,000	2,100,000	210,000	210,000	-
- 군 비	2,100,000	2,100,000	210,000	210,000	-

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획				비고
			합 계	변경승인	변경신청	향후계획
합 계		<16,800> 7,000,000	<16,800> 7,000,000	7,000,000	7,000,000		<>:외서: 자부담
H/W 사업	스쿨존 및 학교가는길 조성	699,000	699,000	538,388	538,388
	문화복지센터 조성	2,500,000	2,500,000	3,240,491	3,240,491
	재래시장 공용주차장 조성	1,341,000	1,341,000	1,356,066	1,345,477	△10,589
	진입관문 및 랜드마크 조성	354,000	354,000	457,700	457,700
	진입로 가로경관정비	789,000	789,000	264,536	264,536
S/W 사업	지역역량강화	<16,800> 318,680	<16,800> 318,680	334,777	349,999	15,222	‘17.04.04 기 승인
	제경비	998,320	998,781	808,042	803,409	△4,633

기능별 사업비(량) 증감사유서

(단위 : 천원)

사 업 명	변경 승인액(1차)(A)	시행계획	증△감 (B-A)	증 감 사 유
		금회신청(B)
합 계	7,000,000	7,000,000	-
○ 기초생활기반확충	5,134,945	5,124,356	△10,589
- 스쿨존 및 학교가는길 조성	538,388	538,388
1-중. 고등학교 앞	248,408	248,408
2-초등학교 앞	289,980	289,980
- 진부 문화복지센터	3,240,491	3,240,491
- 재래시장 공용주차장	1,356,066	1,345,477	△10,589	설계변경내역서 참조
○ 지역경관개선사업	722,236	722,236
- 진입관문 및 랜드마크 조성	457,700	457,700
- 진입로 가로경관정비	264,536	264,536	-
○ 지역역량강화	<6,974> (334,777)	<6,974> (349,999)	15,222
-교육	<16,800> 162,886	<16,800> 171,179	8,923	국내당일견학 1회추가 (변경시행 참조)
-컨설팅·홍보·정보화	137,514	144,443	6.929	홍보물품지원 추가 (변경시행 참조)
-마을경영	34,377	34,377
○ 제경비	808,042	803,409	△4,633
기본계획,세부설계비,공사감리비 등	808,042	803,409	△4,633

사 업 비 수 지 예 산 서

구분		기본계획	(2차) 승인액	변경 신청액	증(△)감	증감사유	비고
합 계		<16,800> 7,000,000	<6,974> 7,000,000	<6,974> 7,000,000	-	-
H / W 사 업	스클존 및 학교가는길	699,000	538,388	538,388	-
	문화복지센터	2,500,000	3,240,491	3,240,491	-
	재래시장 공용주차장	1,341,000	1,356,066	1,345,477	△10,589	설계변경내역서 참조
	계		5,134,945	5,124,356	△10,589
	진입관문 및 랜드마크	354,000	457,700	457,700	-
	진입로 가로경관정비	789,000	264,536	264,536	-
	계		722,236	722,236
S/W 사업		<16,800> 319,000	<6,974> 334,777	<6,974> 349,999	15,222	국내당일견학 추가 홍보물품지원 추가
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	170,000	126,418	126,418	-
	공사감리비	409,000	344,600	343,700	△900	농어촌정비법 요율에 의한 정산
	사업관리비	86,000	80,300	80,300	-
	잡 지 출	83,000	61,808	58,075	△3,733	정산에 의한 감
	경관형성계획비	100,000	74,916	74,916	-
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	-	-	-
	기타부대비	-			-
계			808,042	803,409	△4,633

절대 증감 비율 비교표

구분		기본계획	(2차) 승인액	변경 신청액	절대 증감	비율	비고
합 계		<16,800> 7,000,000	<6,974> 7,000,000	<6,974> 7,000,000	-	-
H / W 사 업	스클존 및 학교가는길	699,000	538,388	538,388
	문화복지센터	2,500,000	3,240,491	3,240,491
	재래시장 공용주차장	1,341,000	1,356,066	1,345,477
	계		5,134,945	5,124,356	10,589	0.21%
	진입관문 및 랜드마크	354,000	457,700	457,700	-
	진입로 가로경관정비	789,000	264,536	264,536	-
	계		722,236	722,236	-
S/W 사업		<16,800> 319,000	<6,974> 334,777	<6,974> 339,999	15,222	4.54%